[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화예술과	②담당자 (연락처)	7급 박미현(8566) 5급 이영권(3208)
③정책사업명	목포 시청각 영어도서관 건립
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2012. 6 ~ 2015. 6.
⑥주요내용	○ 추진배경 - 문화체육관광부 지원 사업에 2012년 영어 특성화 도서관 시범 조성사업 응모에 선정 ○ 사업개요 - 위 치 : 목포시 석현동 1175-6번지(목포어린이도서관 옆) - 사업기간 : 2012. 6 ~ 2015. 6 - 규 모 : 부지 3,570㎡(8,822㎡분할예정),연면적 934.8㎡(지상2층) ▪ 1층 : 종합자료실, 키즈룸, 북카페 ▪ 2 층 : 스터디룸, 다목적강의실, 사무실 등 - 총 사업비 : 20억원(국비10, 시비 10) ○ 추진계획 및 추진 상황 - ‘12. 5. 21 : 문화체육관광부 도서관 조성사업 공모에 선정 - ‘12. 6. 15 : 시청각영어도서관 건립추진 계획수립 - ‘12. 9. 24 : 지방재정 투․융자사업 심사완료 - ‘12. 9. 26 : 용역과제사전심사 완료 - ‘12. 10. 10 : 공유재산 심의회 완료 - ‘13. 3. 21 : 공유재산 관리계획 승인 - ‘13. 9. 2 : 기본 및 실시설계 추진계획 수립 - ‘13. 9. 13 : 용역 일상감사(계약심사) 완료 - ‘13. 10. 23 : 건립 기본 및 실시설계용역 계약 - ‘13. 10. ~ ’14. 10월 : 기본 및 실시설계용역 완료 - ‘14. 12 ~ ’15. 6월 : 공사 착공 및 준공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-29	담당부서 작성자	교육문화사업단 /문화예술과 (박미현/270-8566)
정 책 명	영어도서관 건립공사
사업개요	○ 추진기간 : 2012. 6 ~ 2015. 6 ○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시비 1,000) ○ 건립개요 • 위 치 : 목포시 석현동 1175-9, 10번지(어린이도서관 옆) • 규 모 : 부지 2,476㎡, 연면적 935.03㎡(지상2층) - 1 층 : 종합자료실, 키즈룸, 북카페 - 2 층 : 스터디룸, 다목적강의실, 사무실 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘12. 5. 8. ~ 5. 12 : 2012년 시청각영어도서관 시범조성사업 공모 신청 및 선정 - 관련자 : 문화예술과 담당자 김오심, 책임관 조선아, 과장 손관기, 교육문화사업단장 박병욱 ○ ‘12. 6. 15 : 2012 목포 시청각영어도서관 건립추진 계획수립 - 관련자 : 문화예술과 담당자 김오심, 책임관 조선아, 과장 손관기 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ ‘12. 8. 3. ~ ’12. 10. 10 : 지방재정투융자사업심사 및 공유재산심의 완료 등 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박경희, 책임관 조선아, 과장 김천환 ○ ‘13. 9. 2. : 기본 및 실시설계 추진계획 수립 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박경희, 책임관 김혜란, 과장 김천환 교육문화사업단장 박영호, 부시장 윤진보 시장 정종득 ○ ‘13. 10. 23 : 기본 및 실시설계 계약의뢰 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박경희, 책임관 김혜란, 과장 김천환 ○ ‘14. 10. 2 ~ ’14. 11. 25 - 전라남도 계약심사 요청 및 완료, 발주계획수립 및 계약의뢰 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박경희, 책임관 김혜란, 과장 김천환 교육문화사업단장 김문옥, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ ‘14.12.16 ~ : 공사 착공 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박경희, 책임관 김혜란, 과장 김천환 ○ ‘15. 6.16 ~ : 공사 준공 - 관련자 : 문화예술과 담당자 박미현, 책임관 김은희, 과장 이옥재