〔별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

노인장애인과

②담당자

(전화번호)

행정7급 안경자

노인장애인과장 선종삼

(061-270-3343)

③정책사업명

노숙인시설(진성원) 기능보강 사업 추진 (2016-1)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입되는 사업

⑤사업기간

2014. 5.~2016. 7

⑥주요내용

○ 사업목적

- 노숙인시설 진성원 시설물의 노후로 발생하는 재해로부터 시설생활자들의 안전을 도모하고, 쾌적하고 위생적인 환경 및 질적 서비스를 제공하기 위함

○ 위    치 : 전남 무안군 삼향읍 유교길 101 일원

○ 규    모 : 식당, 사무실, 생활관 개축/강당 개보수

○ 사 업 비                                (단위 :  천원)

구분	계	국비(50%)	도비(25%)	시비(25%)	비고
계	1,461,040	730,520	365,260	365,260
식당및생활관	854,826	427,413	213,707	213,706
강당	606,214	303,107	151,553	151,554

○ 사업변경                                 (단위 :  천원)

사업내용	규모	당초	변경	감액	비고
강당개보수→철거	1,014.9㎡	606,214	197,720	감408,494

※사유 : 시설안전 재진단 결과 D등급 판정되어 생활자들의 안전을 위해 개보수보다             철거로 보건복지부 승인

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-1	담당부서 작성자	(자치행정복지국/노인장애인과) (안경자/061-270-3343)
정 책 명	노숙인시설(진성원) 기능보강 사업 추진
사업개요	○ 추진배경 - 진성원 시설물의 건축물 안전진단 결과 안전도가 매우 낮은 상황으로, 이로 인해 발생하는 재해로부터 시설생활자들의 안전을 도모하기 위하여 기능보강 사업 추진 ○ 추진기간 : 2014. 5. ~ 2016. 7. ○ 총사업비 : 1,461백만원 ○ 주요내용 : 식당, 사무실, 생활관 개축/강당 개보수
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2014. 5. : 노숙인시설 기능보강 국고보조금 신청서 제출 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 김우정, 주무관 서영식 ○ 2014. 5. : 노숙인시설 기능보강사업 국·도비 보조금 교부 - 관련자 : 전라남도 사회복지과 과장 김양수, 복지정책담당 손점식, 주무관 허은희 - 관련자 : 보건복지부 사회복지정책실 자립지원과 오수진 ○ 2014. 12. 노숙인시설 기능보강 시비분 예산 확보 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 김우정, 책임관 홍성채 ○ 2015. 4. : 기능보강 사업 추진 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 김우정, 주무관 정보현 ○ 2015. 11. : 노숙인시설 기능보강 사업변경 사전검토 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 이 영, 주무관 안경자 - 관련자 : 전라남도 사회복지과 과장 최성진, 복지정책담당 전광호, 주무관 김하경 - 관련자 : 보건복지부 사회복지정책실 자립지원과 사무관 김창완, 주무관 홍모래 ○ 2015. 12. : 노숙인시설 기능보강 사업변경 보건복지부 승인 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 이영, 주무관 안경자 - 관련자 : 전라남도 사회복지과 과장 최성진, 복지정책담당 전광호, 주무관 김하경 - 관련자 : 보건복지부 사회복지정책실 자립지원과 사무관 김창완, 주무관 홍모래 ○ 2016. 3. : 노숙인시설 기능보강 사업변경 추진 - 관련자 : 노인장애인과 과장 선종삼, 담당 이영, 주무관 안경자

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

노인장애인과

②담당자

(연락처)

사회복지7급 김해준

노인장애인과장 선종삼

(270-8815)

③정책사업명

장애인생활시설(공생재활원) 기능보강사업 추진 (2016-2)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015.1.~ 2016.12.

⑥주요내용

○ 사업목적

- 장애인거주시설 공생재활원 시설물 노후화에 따른 안전사고 대비와 고하도 개발에 의한 시설 이전 등 시설생활자에게 쾌적하고 위생적인 환경 및 질적 서비스를 제공하기 위함

○ 위    치 : 전남 목포시 연산동 635-14, 636-1

○ 사 업 자 : 사회복지법인 공생복지재단 (공생재활원)

○ 규    모 : 3,300㎡

○ 사 업 비                                (단위 :  천원)

계	국 비	도 비	시비	비고
4,191,000	2,095,000	1,047,750	1,047,750

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-2	담당부서 작성자	(자치행정복지국/노인장애인과) (김해준/061-270-8815)
정 책 명	장애인생활시설(공생재활원) 기능보강 사업
사업개요	○ 추진배경 - 공생재활원 시설물의 건축물 안전진단 결과 안전도가 매우 낮은 상황으로, 이로 인해 발생하는 재해로부터 시설생활자들의 안전을 도모하기 위하여 기능보강 사업 추진 ○ 추진기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12. ○ 총사업비 : 4,191백만원 ○ 규 모 : 3,300㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 5. : 장애인거주시설 기능보강 국고보조금 신청서 제출 - 관련자 : 노인장애인과 과장 박헌숙, 담당 한덕호, 실무관 김귀영 ○ 2014. 1. : 장애인거주시설 기능보강사업 국·도비 보조금 교부 - 관련자 : 전라남도 노인장애인과 과장 임현식 장애인재활담당 최영옥, 주무관 김희복 - 관련자 : 보건복지부 장애인권익지원과 박준구 ○ 2015. 1. : 장애인거주시설 기능보강 일부 시비분 예산 확보 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 김우정, 실무관 박혜정 ○ 2015. 5. : 기능보강사업비 잔여분 시비 예산 확보 - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 김우정, 실무관 박혜정 ○ 2015. 10. : 장애인거주시설 기능보강사업 사업지 변경 (무안군→목포시 연산동) - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 이 영, 실무관 장계화 ○ 2015. 12 : 장애인거주시설 기능보강사업 착공 및 공사비 일부 집행(3,142,750천원) - 관련자 : 노인장애인과 과장 김혜자, 담당 이 영, 실무관 장계화 ○ 2016. 1. : 장애인거주시설 기능보강 공사 진행중 - 관련자 : 노인장애인과 과장 선종삼, 담당 이 영, 실무관 김해준

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

농업산업과

②담당자

(전화번호)

공업7급 최용석

농업산업과장 김석우

(061-270-3357)

③정책사업명

도시가스공급 보조사업 (2016-3)

④선정기준

10억원이상 예산사업

⑤사업기간

2007.~2017.

⑥주요내용

❐ 목   적 : 주민의 생활환경 개선을 위해 도시가스 공급사업을      추진 함으로써 신･원도심 기회균등 및 경제적 부담감 해소

❐ 근   거 : 도시가스공급 보조금지원 및 관리조례(‘14.12.29 개정)

❐ 지원대상 : 공급관 길이 100미터당 10세대이상 45세대 미만구간

❐ 연도별 확대 지원계획

(단위 : 세대, 억원)

구 분	계	2016년	2017년
공급세대	2,854	1,415	1,439
지 원 액	30	15	15

※ ‘07 ~ ’15년까지 도시가스 공급실적 : 7,619세대, 69억원

❐ 2016년 추진계획

○ 2016년도 사업추진(46개구간 1,415세대, 15억원)

□ ‘16. 1 ~  3월  공급대상 구간 선정, 지정물 조사 및 설계

□ ‘16. 3월       사업추진에 따른 주민설명회 개최

□ ‘16. 4 ~ 12월  공사착공 및 준공

○ 도시가스공급 수요조사

□ ‘15. 10 ~ 12월  원도심지역(19개동) 추가 수요조사

□ ‘16.  1 ~  7월  보조사업 대상여부 검토 및 공급계획 수립

❐ 기대효과

○ 시민 연료비 절감으로 편익증진 및 생활 불편 해소

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	20016-3	담당부서 작성자	(관광경제수산국/농업산업과) (최용석/061-270-3357)
정 책 명	도시가스공급 보조사업
사업개요	○ 추진배경 - 도시가스 미공급지역 연료취약계층의 연료사용 환경개선 ○ 추진기간 : 2007. ∼ 2017. ○ 총사업비 : 10,000백만원 ○ 주요내용 - 도시가스공급 추진계획 수립 - 보조사업 구간 신청서 검토 및 동별 주민설명회 개최 - 도시가스공급 보조사업비 교부
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 07.1.22 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (6개구간 259세대, 200백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 김장흥, 국장 추영동, 부시장 이종범, 시장 정종득 ○ 08.02.18 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (14개구간 580세대, 500백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 홍철수, 국장 추영동, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 09.06.01 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (11개구간 530세대, 1000백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 이현진, 국장 강행백, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 10.06.01 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 이현진, 국장 강행백, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 11.02.21 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 제갈명, 담당 문명식, 과장 정현채, 국장 김윤식, 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ 12.02.03 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 제갈명, 담당 문명식, 과장 정현채, 국장 박영호, 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ 13.2.29 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (37개구간 1033세대, 900백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 박동구, 담당 김영준, 과장 조부갑, 국장 박영호, 부시장 윤진보, 시장 정종득 ○ 14.2.25 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (38개구간 1,542세대, 1230백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 신성원, 담당 김영준, 과장 조부갑, 국장 김찬익, 부시장 윤진보, 시장 정종득 ○ 15.3.29 : 도시가스공급 보조사업 추진 (54개구간 1,550세대, 1230백만원) - 관련자 : 농업산업과 담당자 신성원, 담당 권승현, 과장 김석우, 국장 김문옥, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 15.10.01 : 도시가스공급 보조사업 수요조사 - 조사기간 : ‘15. 10. 1. ~ 12. 31.(3개월) - 대상지역 : 원도심지역 19개동(신흥,옥암,부흥,부주동 기조사 완료) - 관련자 : 농업산업과 담당자 신성원, 담당 이정순, 과장 김석우, 국장 김문옥, 부시장 이재철, 시장 박홍률

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

교통행정과

②담당자

(전화번호)

공업7급 박철우

교통행정과장 박경연

061-270-8294

③정책사업명

목포/무안/영암/신안 광역버스정보시스템(BIS) 구축 2016-4

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업

⑤사업기간

′15. 4~′16. 9

⑥주요내용

■ 사업기간 : ′15. 4~ ′16. 9

■ 사업예산 : 1,334백만원(국비 400, 도비 400, 시·군비 534)

■ 사업범위 : 목포, 무안, 영암, 신안 등 4개 시·군 주요 간선도로

■ 사 업 량

사 업 내 용		합 계	목 포	무 안	영 암	신 안	비 고
현 장 부 문	정류소안내기	58식	24식	18식	9식	7식
	차량단말기	89식	-	20식	29식	40식
센 터 부 문	센터시스템	1식	1식	1식	1식	1식
	응용 S/W (연계, 개선)	1식	1식	1식	1식	1식
기 타	기 본 설 계	1식	1식	1식	1식	1식
	사 업 관 리	1식	1식	1식	1식	1식

■ 사업내용

- 운행중인 버스의 실시간 위치, 운행상태 등의 정보수집

- 승강장에 설치된 단말기를 통한 버스의 출발, 도착,

배차시간 제공

■ 향후 사업 추진계획

- ′15. 4. : 광역BIS 구축사업(관리용역) 계약심사, 일상감사 이행

- ′15. 5. : 2015 광역BIS 구축사업(관리용역) 계약 의뢰

- ′15. 8 ~9. : 2015 광역BIS 구축사업 일상감사 및 계약심의

- ′15. 9. : 2015 광역BIS 구축사업 조달 계약 의뢰

- ′15. 11. ~ 2016. 9. : 사업 추진 및 시험운영, 준공

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-4	담당부서 작성자	도시건설국 / 교통행정과 박철우/061-270-8294
정 책 명	목포/무안/영암/신안 광역버스정보시스템(BIS) 구축
사업개요	○ 추진배경 - 수도권, 대도시를 비롯한 전남도내 동남권의 경우 BIS사업이 활발히 추진되고 있으나, 서남권(목포·무안·영암·신안)은 서비스 기반 미약 - 버스운행관리 정보제공을 통해 시민들의 버스 정시도착 기대에 부응하여 이용율 증가 및 버스운영자 경영적자 해소에도 기여 ○ 추진기간 : 2015. 4 ~ 2016. 9 ○ 총사업비 : 1,334백만원(목포413, 무안402, 영암265, 신안 254) ○ 주요내용 - 정류소안내기 58대, 차량단말기 89대, 센터 개선 1식
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○′15. 2. : 2015 광역BIS 최종 사업계획서 국토교통부 제출 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 국고보조금 교부 결정 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업 추진 4개 시·군 행정협의체 구성 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업 협정서 체결 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업(관리용역) 용역과제 사전심의 이행 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 4. : 2015 광역BIS 구축사업 계약심사 및 일상감사 의뢰 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 7~ 8. : 2015 광역BIS 구축사업 일상감사 및 계약심의회 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 9~ 11. : 2015 광역BIS 구축사업 조달계약의뢰(사전규격평가 및 공고) - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 12. : 2015 광역BIS 구축사업 조달계약 체결 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 12. : 2015 광역BIS 구축사업 착수 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′16. 01. : 2015 광역BIS 구축사업 선급금 지급 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	② 담당자 (연락처)	시설7급 이주현 하수과장 권장주 (061-270-3537)
③정책사업명	상하수도(대양이로하수처리분구 연계처리 시설사업) 2016-5
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010~2017년
⑥주요내용	○ 추진목적 : 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성 ○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원 ○ 사 업 량 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.1km ○ 사 업 비 : 9,681백만원(국비 4,840, 도비 483, 시비 4,358) ○ 사업기간 : 2010년 ~ 2017년 ○ 주요 추진사항 - 2010. 6. ~ 2014. 4. : 기본 및 실시설계용역 - 2010. 7. : 지방재정투융자 승인(전라남도) - 2011. 11. : 중기지방재정계획 반영 - 2013. 3. : 공사 착공(총괄 및 1차분) - 2013. 6. : 2차분 공사 착공(2014. 8. 준공) - 2013. 8. : 1차분 공사 준공 - 2013. 12. : 3차분 공사 착공 - 2014. 6. : 전기공사 1차분 착공 - 2015. 5. : 압송관로 5.1km중 4.9km 매설 완료 - 2015. 8. : 4차분 공사 착공 ○ 사업추진계획 - 2016. 5 : 4차분 공사 준공 - 2016.～2017 : 잔여구간 공사추진 및 완료

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-5	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (이주현/061-270-3537)
정 책 명	대양이로 하수처리분구 연계처리 시설사업
사업개요	○ 추진배경 - 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수 처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2010년 ~ 2017년 ○ 총사업비 : 9,681백만원(국비 4,840, 도비 483, 시비 4,358) ○ 주요내용 - 중계펌프장 2개소, 압송관 5.1km
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 3. : 공사 착공(총괄 및 1차분) - 관련자 : 시장 정종득, 부시장 주동식, 상하수도사업단장 박소영 하수과장 조용선, 하수담당 황용규 ○ 2013. 8. : 1차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2014. 8. : 2차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 5. : 3차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 6. : 4차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	② 담당자 (연락처)	시설7급 이주현 하수과장 권장주 (061-270-3537)
③정책사업명	상하수도(용해2지구∼백련펌프장 하수관거 정비사업) 2016-6
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014~2020년
⑥주요내용	○ 추진목적 : 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성 ○ 위 치 : 목포시 용해2지구~백련펌프장(압해대교 아래) ○ 사 업 량 : 하수관거 정비 L=1.58km ○ 사 업 비 : 18,550백만원(국비 12,985, 지방비 5,565) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 주요 추진사항 - 2011. 10 : 지방재정투융자 심사 (전남도) - 2014. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2014. 10. : 전략환경영향평가용역 착수 - 2014. 11. : 도시관리계획 변경결정 용역 착수 - 2015. 1. : 도시관리계획 변경 결정을 위한 입안 요청(도시계획과) - 2015. 2. : 설계자문(전남도) - 2015. 4. : 건설기술심의(전남도) - 2015. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 인가고시 - 2016. 1. : 토지 및 지장물 보상 추진 ○ 사업추진계획 - 2015. 5. : 재원협의 등 행정절차 이행 - 2015. 7～ : 공사착공 예정

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-6	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (이주현/061-270-3537)
정 책 명	용해2지구∼백련펌프장 하수관거 정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제 하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 총사업비 : 18,550백만원(국비 12,985, 지방비 5,565) ○ 주요내용 - 하수관거 정비 L=1.58km
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 10. : 기본 및 실시설계용역 계획보고 - 관련자 : 시장 정종득, 부시장 윤진보, 상하수도사업단장 김문옥 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2014. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 김정수 ○ 2014. 11. : 도시관리계획 변경결정 용역 착수 - 관련자 : 상하수도사업단장 김치중, 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 2∼4. : 설계자문 및 건설기술심의(전남도) - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 9. : 도시계획시설사업 실시계획인가고시 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김명봉

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설7급 이주현 하수과장 권장주 (061-270-3537)
③정책사업명	상하수도(상동 초기우수처리시설 설치사업) 2016-7
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010년~2017년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널 앞 저지대 상습 침수문제 해소 - 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞 - 사 업 비 : 15,609백만원(국비 10,926, 시비 4,683) - 사업기간 : 2010년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수 암거개량 125m, 조경시설물 철거 및 복구 ○ 사업추진현황 - ‘09. 4. 30 : 전라남도 지방 재정투ㆍ융자 심사 - ‘10. 1. 28. : 기본 및 실시설계 착수 - ‘12. 2. 27. : 전라남도 지방건설기술심의 - ‘13. 4. 15. : 기본 및 실시설계 준공 - ‘13. 4. 23. : 1단계 공사 착공 - ‘16. 1. 22. : 초기우수저류조V=10,000㎥, 기계실 1식 공사 준공(1단계) - ‘16. 3. 30. : 2단계 공사 착공 ○ 사업추진계획 - ‘17. 1. : 2단계 1차분 공사준공 - ‘17. 9. : 2단계 공사 준공 및 사업완료

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-7	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (이주현/061-270-3537)
정 책 명	상동 초기우수처리시설 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널 앞 저지대 상습 침수문제 해소 ○ 추진기간 : 2010년 ~ 2017년 ○ 총사업비 : 15,609백만원(국비 10,926, 시비 4,683) ○ 주요내용 - 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수암거개량 125m, 조경시설물 철거 및 복구
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2010. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2013. 4. : 1단계 공사착공 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 김정수 ○ 2016. 1. : 1단계 공사준공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 3. : 2단계 공사착공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설6급강혜선 하수과장 권장주 (061-270-8627)
③정책사업명	상하수도(북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업) 2016-8
④선정기준	10억원이상 건설사업	⑤사업기간	2012년~2017년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 북항 하수종말처리시설의 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수로 공공수역 수질 개선 - 위 치 : 북항하수처리시설 내 - 사업비 : 10,601백만원(국비 5,301, 도비 225, 시비 5,075) - 사업기간 : 2012년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 고도처리 Q=35,000㎥/일 ○ 사업추진현황 - ‘10. 5. 6. : 지방재정 투․융자 심사 완료 - ‘12. 5. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 - ‘14. 2. 25. : 공법 2차평가 완료 - ‘14. 6. 10 : 목포시 건설기술심의 - ‘14. 9. 16 : 설계자문(전남도) 및 재원협의(영산강청) - ‘14. 12. 8 : 총사업비 변경 승인(7,944백만원→10,601백만원) - ‘14. 12. 16 : 실시설계 용역 준공 - ‘14. 12. 18 : 공공하수도 설치(변경) 인가 - ‘15. 2. 2 : 전라남도 계약심사 - ‘15. 4. 3 : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 7. 21 : 공사계약 의뢰 - ‘15. 11. 20 : 총괄분 및 1차분 착공 ○ 사업추진계획 - ‘17. 1. : 3차분 공사착공 - ‘17. 12. : 총괄분 준공 및 정상운영

별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설6급강혜선 하수과장 권장주 (061-270-8627)
③정책사업명	상하수도(남악신도시 하수처리장 증설사업) 2016-9
④선정기준	10 억원이상 건설사업	⑤사업기간	2013년~2017년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속증가에 따른 하수처리량 증가로 하수처리시설 증설 - 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지 일원 - 사업비 : 26,547백만원(목포시 11,609, 전남개발공사 14,938) - 사업기간 : 2013년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 시설용량 10,000㎥/일 증설 ○ 사업추진현황 - ‘13. 5. 9. : 기본 및 실시설계 용역착수 - ‘13. 7. 31. : 도 투·융자 심사 조건부 승인 - ‘13. 8. 30. : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정(무안군, 전남개발공사) - ‘14. 4. 14. : 공법 평가 및 선정 - ‘15. 1. 29. : 전라남도 건설기술심의 - ‘15. 3. 26. : 기본 및 실시설계용역 준공 - ‘15. 5. 26. : 조달청 원가심사 - ‘15. 6. 15. : 일상감사 - ‘15. 7. 14. : 공공하수도설치(변경) 인가 - ‘15. 9. 22. : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 10. 1. : 공사 계약의뢰 - ‘15. 12. 9. : 총괄분 및 1차분 착공 ○ 사업추진계획 - ‘17. 1. : 3차분 공사착공 - ‘18. 12. : 총괄분 준공 및 정상운영

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설6급강혜선 하수과장 권장주 (061-270-8627)
③정책사업명	상하수도(하수도정비 중점관리지역 정비사업) 2016-10
④선정기준	10억원이상 건설사업	⑤사업기간	2013년~2021년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 최근 침수피해 증가와 강우패턴 변화로 하수도시설 확충 등 정비를 통한 도시침수 예방 - 위 치 : 목포시 용당1ㆍ2동, 상동, 하당동 일원 - 사업비 : 35,016백만원(국비 24,511, 지방비 10,505) - 사업기간 : 2013년 ~ 2021년 - 사업량 : 관거정비 3.18km, RTC 1식, 빗물펌프장 2개소 ○ 사업추진현황 - ‘13. 2. 2. : 하수도정비 중점관리지역 지정고시(환경부) - ‘13. 12. 31. : 타당성조사 및 기본계획 용역 준공 - ‘14. 5. 22. : 타당성조사 및 기본계획 승인(환경부) - ‘14. 7. 14. : 지방재정 중앙 투ㆍ융자 심의 - ‘14. 9. 25. : 기본 및 실시설계 착수 - ‘15. 3. 18. : 남해 배수펌프장 기술진단 용역 준공 ○ 사업추진계획 - ‘16. 5. : 재원협의 등 행정절차 이행 - ‘16. 6. : 공사발주 - ‘21. 12. : 공사 준공

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설9급 정경만 하수과장 권장주 (061-270-3640)
③정책사업명	백련배수펌프장 신설공사 (2016-11)
④선정기준	10억원이상 예산 사업	⑤사업기간	2014. 6 ~ 2017. 11
⑥주요내용	○ 추진배경 - 삼향동, 용해동, 연산동 지역의 지반이 평균 해수면보다 낮고 소하천 및 하수관거 정비가 완료되지 않아 태풍 및 집중호우로 인해 침수발생 - 재해위험개선지구로 지정된 백련지구의 침수피해 해소를 위해 배수펌프장 신설 필요 ○ 추진기간 : 2013. 5. ～ 2017. 11. ○ 총사업비 : 250억원(국비 126, 시비 124) ○ 주요내용 - 배수펌프장 신설(Q=2,115㎥/분), 유수지 V=58,600㎥ ○ 추진상황 - 2004. 8. : 재해위험지구 지정 - 2012. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2014. 1. : 사전설계검토(소방방재청) - 2014. 3. : 지방건설기술심의(전라남도) - 2014. 4. : 공공디자인 심의(전라남도) - 2014. 5. : 계약심사(전라남도) - 2014. 6. : 공사계약 체결 및 1차분 착공 - 2016. 2. : 1차분 준공, 건설사업관리용역 착공 - 2016. 3. : 2차분 착공

[별지 제2호서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2016-11

담당부서

작성자

(상하수도사업단 / 하수과)

(정경만/061-270-3640)

정 책 명

백련배수펌프장 신설공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 삼향동, 용해동, 연산동 지역의 지반이 평균 해수면보다 낮고

소하천 및 하수관거정비가 완료되지 않아 태풍 및 집중호우로

인해 침수발생

- 재해위험지구로 지정된 백련지구의 침수피해 해소를 위해

배수펌프장 신설 필요

○ 추진기간 : 2013. 5. ~ 2017. 11.

○ 총사업비 : 250억원(국비 126, 시비 124)

○ 주요내용

- 배수펌프장 신설(Q=2,115㎥/분), 유수지 V=58,600㎥

○ 추진경과

- 2004.  8. : 재해위험지구 지정

- 2012. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2014.  1. : 사전설계검토(소방방재청)

- 2014.  3. : 지방건설기술심의(전라남도)

- 2014.  4. : 공공디자인 심의(전라남도)

- 2014.  5. : 계약심사(전라남도)

- 2014.  6. : 공사계약 체결 및 1차분 착공

- 2016.  2. : 1차분 준공, 건설사업관리용역 착공

- 2016.  3. : 2차분 착공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 하수과 시설8급  이인정(성명)

- 최종 결재자 : 목포시장        정종득(성명)

○ 사업 관련자

구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시장	정종득		‘12.12.26.～‘14.6.31.
〃	박홍률		‘14.7.1.～현재
부시장	주동식	부이사관	‘11.1.1.∼’13.7.18.
〃	윤진보	〃	‘13.7.19.∼‘15.7.19.
〃	이재철	〃	‘15.7.20.～현재
상하수도 사업단장	박소영	〃	‘12.12.26.∼’13.1.8.
〃	김찬익	행정서기관	‘13.1.8.∼’13.7.29.
〃	김문옥	〃	‘13.7.29.～‘14.8.5.
〃	김치중	〃	‘14.8.6.～‘16.1.14.
〃	김찬익	〃	‘16.1.15.～현재
하수과장	조용선	시설사무관	‘12.12.26.～’13.7.29.	하수과 업무 전반
〃	손상돈	환경사무관	‘13.7.29.～’14.8.22.	〃
〃	이상호	시설사무관	‘14.8.23.～’16.1.14.	〃
〃	권장주	시설사무관	‘16.1.15.～현재	〃
침수방지 책임관	조동준	공업6급	‘12.12.26.～’13.1.21.	침수방지계 업무전반
〃	김용근	〃	‘13.1.21.～‘14.8.6.	〃
〃	조동준	〃	‘14.8.7.～‘15.8.12.	〃
〃	강봉도	〃	‘15.8.13.～현재	〃
담당	이인정	시설8급	‘12.12.26～’13.1.21	배수펌프장 신설
〃	윤재웅	시설7급	‘13.1.21～’16.1.20	〃
〃	정경만	시설9급	‘16.1.21～현재	〃

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- ㈜도화엔지니어링

- ㈜신오엔지니어링

○ 시공자

- 해오름종합건설㈜

○ 감리자

- ㈜선진엔지니어링, ㈜우빈기술공사

추진실적

- 기본 및 실시설계용역 집행계획 보고

- 기본 및 실시설계용역 착수계

- 시설공사 발주계획 검토보고

- 건설사업관리방식 검토보고

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	시설8급 이석태 도시재생과장 배석인 (061-270-3643)
③정책사업명	삼학도 복원화사업 공원조성공사 (2016-12)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2004~2018
⑥주요내용	❐ 사업개요 ○ 목 적 : 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민 휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 위 치 : 산정동 대․중․소삼학도 일원 ○ 사 업 비 : 1,399억원 ○ 사업기간 : 2004. 12. ~ 2018. 12. ○ 사 업 량 : 공원 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등 ❐ 사업추진현황 ○ 2004. 12 : 삼학도 복원화사업 공원조성공사 착수 ○ 2011. 12 : 호안수로 2.1㎞, 산책로 4.2㎞, 교량9개소, 취배수갑문 3개소, 배수로 3.7㎞, 파크골프장 조성 등 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분공장 철거 완료 ○ ‘13. 7. : 중앙공원 조성, 구)한국제분 철거부지 산형태복원 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공, 중앙공원 가로등 설치 완료 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 ○ ‘16. 4. : 중앙공원 생태연못 조성완료 및 수목식재 추진

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-12	담당부서 작성자	(도시개발사업단/ 도시재생과) (이석태/0691-270-3643)
정 책 명	삼학도 복원화사업 공원조성공사
사업개요	○ 추진배경 - 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 추진기간 : 2004.12. ~ 2018.12. ○ 총사업비 : 139,921백만원 ○ 주요내용 - 공원조성 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘00. 4. : 공원변경 결정 및 지적고시(전남도고시 제2000-41호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 5. : 삼학도공원 조성계획 변경결정 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 8. : 남해안 관광벨트개발사업 사업계획 승인 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 실시설계 완료 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 연안정비사업 실시계획 승인(해수부고시 2001-112호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사(토목) 착공 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´04.12 ~ ´06. 6 : 토목 1차 공사 완료(수로 742m, 배수갑문 1개소, 교량 5개소) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´06. 6 ~ ´08. 4 : 토목 2차 공사 완료(호안수로 540m, 교량 1개소) ※ ‘07. 3. : 1차 공사 완료구간 시민 개방 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´09. 2. : 공원조성계획 변경 및 지형도면고시 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 3. : 호안수로 1,458m 전면통수 및 교량4개소, 산책로4.4㎞ 개방 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 5. : 토목공사 3․4차분 준공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ‘11. 3. : 토목 5차분 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘11. 12. : 배수갑문 1개소, 파크골프장 조성, 철도횡단구간 호안수로 연결 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 4. : 구)한국제분 공장 철거공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 8. : 한국제분 사일로 14기 철거(1차 : 8.1일(8기), 2차 : 8.10일(6기)) - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분 공장 철거공사 완료, 중앙공원 조경공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 10. : 대삼학도 절개지 산형태 복원 등 활용계획 방안 검토보고 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 12. : 산형태 복원구간 측량 및 복원공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철 책임관 김명봉, 실무관 진헌민 ○ ‘13. 7. : 중앙공원, 한국제분 철거부지 산형태 복원 등 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘13. 12. : 목포 삼학도선(철도) 폐지 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘14. 5. : 삼학도 공원내 철도 선로 철거 완료(380m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김진현, 실무관 김신주 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 10. : 중앙공원 생태연못 조성완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정 ○ ‘16. 4. : 중앙공원 산형태복원 수목식재 추진 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	시설8급 이석태 도시재생과장 배석인 (061-270-3643)
③정책사업명	도심관통 도로개설 (2016-13)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2008년~2018년
⑥주요내용	○ 추진배경 : 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 사업개요 - 사업명 : 도심관통 도로개설 - 사업위치 : 구)중앙공설시장~7호광장간 - 사업내용 : 도로개설 L=555m, B=20m - 사업기간 : 2008~2018 - 사업비 : 36,180백만원

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-13	담당부서 작성자	(도시개발사업단/ 도시재생과) (이석태/061-270-3643)
정 책 명	도심관통 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 추진기간 : 2008 ~2018 ○ 총사업비 : 36,180백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=555m, B=20m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘05. 10. 28. : 지방재정투융자 심사(자체) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘06. 04. 18. : 용역과제 사전심의 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘07. 03. 23. : 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 추진 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘07. 11. 27. : 도시관리계획시설 결정(변경) 지형도면 고시 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘08. 05. 27. : 실시계획인가 사전 공람공고(한복거리~백제약국) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박경곤, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘08. 09. : 도시관리계획 시설사업(도로) 실시계획인가 고시 ※ 도로개설 L=555m, 중 1단계 L=165m(1․2구간) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘09. 12. : 보상계획 공고 및 열람(1단계 1차 구간 : L=89m, B=20m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 윤병종, 실무관 민경종 ○ ‘10. 01~12 : 한복거리구간(1차구간) 보상 및 지장물 철거 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘10. 12. : 도시관리계획시설사업(도로) 실시계획인가(변경)고시 ※ 사업기간 연장 : ‘10. 12. 31. → ‘14. 12.31. - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘13. 7. ~ 12월 : 2차구간(L=76m) 65억원(보상49, 공사16)중 보상비 39억원(백제약국 10억원 제외) 3회 분할지급(13년 8억원 보상) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 김진희 ○ ‘14. 01. : 2구간 16필지 분할보상금 2차분 지급 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 정대균 ○ ‘14. 12. : 국비 특별교부세 확보(10억) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김재성 실무관 김형중 ○ ‘15. 02. : 2구간 분할보상금 3차분 지급완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 09. : 2구간 지장물 철거 완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 11. : 2구간 지장물(백제약국) 철거 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정 ○ ‘16. 04. : 1~2구간 도로개설공사 추진 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김신철 도시재생과장 배석인 (061-270-3684)
③정책사업명	도시재생 선도지역사업 (2016-14)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014. 1 ~ 2017. 12
⑥주요내용	○ 2013.12. 시행된 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시쇠퇴로 재생이 시급하고, 주변으로 파급효과가 큰지역을 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반을 조성하는 사업 ○ 대 상 지 : 목원동 일원(『트윈스타』 주변 / 600,000㎡) ○ 사 업 비 : 201.8억원(국비 100.9, 시비 100.9) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년) ○ 사업내용 • 테마거리 조성 • 기존 골목길 정비(골목길 정비, CCTV 설치 등) • 지붕 경관사업(노후 주택 지붕경관 개선) • 공가 활용 게스트 하우스 및 커뮤니티 시설 설치 • 기반시설 정비(도로 2개소, 공원 1개소, 주차장 3개소 등) • 주민역량강화 사업(도시재생대학, 마을학교 등)

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-14	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김신철/061-270-3684)
정 책 명	목포시 도시재생 선도지역 도시재생사업
사업개요	○ 추진배경 - 2013.12. 시행된 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시쇠퇴로 재생이 시급하고, 주변으로 파급효과가 큰지역을 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반을 조성하는 사업 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2017 ○ 총사업비 : 201.8억원(국비 100.9, 시비 100.9) ○ 주요내용 • 테마거리 조성 • 기존 골목길 정비(골목길 정비, CCTV 설치 등) • 지붕 경관사업(노후 주택 지붕경관 개선) • 공가 활용 게스트 하우스 및 커뮤니티 시설 설치 • 기반시설 정비(도로 2개소, 공원 1개소, 주차장 3개소 등) • 주민역량강화 사업(도시재생대학, 마을학교 등)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2014. 3. 14 : 도시재생 선도지역 신청(안) 제출 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 박치현, 책임관 김진현, 과장 윤인영 ○ 2014. 9. 12 : 도시재생 총괄코디네이터 선임 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 10. 1 : 도시재생 활성화계획수립 용역 착수 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 10. 23 : 목포시 도시재생위원회 위원 위촉 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주, 도시개발사업단장 송명완, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 2014. 10. 27 : 제1기 도시재생대학 개강 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획(안) 도시재생위원회 심의 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 11. 20 : 목포시 도시재생 근린재생형 활성화계획 승인요청 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주, 도시개발사업단장 송명완, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 2014. 12. 29 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 공포 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2015. 3. 5 : 목포시 도시재생지원센터 개소식 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 5. 4 : 2015년 주민 제안․공모사업 공고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 5. 6 : 제2기 도시재생대학 수료 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 7. 30 : 2015년 제1회 도시재생위원회 심의 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 도시재생 책임관 김진현, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2015. 8. 31 : 2015년 제2회 도시재생위원회 승인 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2015. 9. 8 : 총괄 및 분야별 코디네이터 위촉(4명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 9. 18 : 도시재생지원센터 센터장 임용 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 10. 2 : 커뮤니티센터 리모델링 용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 10. 8 : 도시재생 활성화계획수립 용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 11. 30 : 제3기 도시재생대학 수료 - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 12. 4 ~ 5 : 2015 목원음식문화축제 개최 - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 12 ~ : 도시재생 서포터즈 모집 및 운영(47명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 2. 25 : 도시재생 선도지역(관광루트 등)사업 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 4 : (가칭)만인계 웰컴센터 조성 설계용역 발주 - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭 ○ 2016. 3. 15 : 마인계터 예술주차장 조성공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 4. 7 : (가칭)목원 어울림회관 조성공사(6분야) 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2016. 4. 15 : 마을학교(게스트하우스 마을학교 육성) 수료(27명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 4. 19 : 「남행열차 포차」운영자 마을학교 교육생 모집공고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정인선 도시재생과장 배석인 (061-270-8744)
③정책사업명	가톨릭성지 활용 관광자원화 시설 조성 (2016-15)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2009. 11. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	□ 사업목적 ∙ 가톨릭 성지 내 레지오 마리애 나눔봉사기념관 건립을 통해 역사적·종교적·문화적 가치를 유지하고, 원도심 지역 경제 활성화 및 지역관광 자원화 기여 □ 사업 현황 ∙ 규 모 : 대지면적 29,729.97㎡, 연면적 14,987.31㎡, 지하1/6층 ∙ 용 도 : 레지오마리애 나눔봉사기념관, 가톨릭역사문화관, 가톨릭미술관, 대성당 및 부대시설, ∙ 사업비 : 577억원(천주교 356, 국비 25.5, 도비 10.2, 시비 185.3) ∙ 사업내용 - 천주교 : 성당 및 부속시설, 성직자동, 나눔봉사기념관, 전망데크 - 목포시 : 기반시설(도로개설 3개소) □ 추진사항 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 ∙ '11. 9. : 기념대성당 건축 인허가 완료 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 ∙ '16. 12. : 나눔봉사기념관 준공 예정 ∙ '17. 12. : 가톨릭성지 조성사업 준공 예정

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-15	담당부서 작성자	(도시개발사업단/도시재생과) (정인선/061-270-8744)
정 책 명	가톨릭성지 활용 관광자원화 시설 조성
사업개요	○ 추진배경 - 호남지역 첫 선교지 의미를 복원하고 성지순례의 메카로 발전시키기 위한 성지조성으로 천주교 신자 방문 명소 및 관광객 유치 기여 ○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2017. 12. ○ 사 업 비 : 577억원(천주교 356, 국비 25.5, 도비 10.2, 시비 185.3) ○ 사업규모 : 대지면적 29,729㎡, 연면적 14,987.31㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '11. 9. : 기념대성당 건축 인허가 완료 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) - 관련자 : 원도심사업과 7급 김상문, 계장 김수광, 과장 윤인영 ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 - 관련자 : 원도심사업과 8급 조성록, 계장 김수광, 과장 박옥주 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) - 관련자 : 도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) - 관련자 : 원도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '16. 12. : 나눔봉사기념관 준공 예정 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정인선 도시재생과장 배석인 (061-270-8744)
③정책사업명	남교지구 트윈스타 행정타운 매입 (2016-16)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2009. 2. ~ 2016. 1.
⑥주요내용	□ 추진배경 ∙ 구)중앙시장 재건축 추진 중 사업이 중단되고 민간개발 사업대상자의 사업 포기로 원도심 공동화의 원인이 되어, 침체된 원도심 기능 활성화를 위해 LH와 재개발사업 시행 협약을 통해 트윈스타 건립 및 입주로 원도심과 신도심 지역균형 발전을 도모 □ 행정타운 현황 ∙ 매입규모 : 연면적 10,858㎡, 층수 3~5층 ∙ 매 입 비 : 매입비 217억원 □ 추진사항 ∙ '09. 02. 25. 트윈스타 MOU체결(목포시-LH) ∙ '09. 05. 22. 트윈스타 개발사업 시행협약 체결 - LH가 요구한 건축비산정 방식에 따라 행정타운 매입 - 주차장시설(47억원) 시 재원으로 건립 ∙ '09. 07. 22. 공유재산 관리계획승인(시의회) ∙ '09. 08. 26. 부지매각 및 행정타운 분양계약 체결 - 부지매각 : 면적 5,040㎡ - 매입규모 : 매입비 217억, 면적 9,200㎡ ∙ '10. 11. 15. 트윈스타 건축허가 - 행정타운 : 면적 10,858㎡(증 1,658㎡), 층수 지상 3~5층 ∙ '14. 08. 22. 트윈스타 사용승인 ∙ '16. 03. 21. 행정타운 입주

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-16	담당부서 작성자	(도시개발사업단/도시재생과) (정인선/061-270-8744)
정 책 명	남교지구 트윈스타 행정타운 매입
사업개요	○ 추진배경 - 원도심공동화 현상 방지 및 원도심과 신도심 지역균형 발전을 도모하고자 함. ○ 추진기간 : 2009. 2 ~ 2016. 1. ○ 매 입 비 : 217억원 ○ 매입규모 : 연면적 10,858㎡, 층수 3~5층
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ∙ '09. 02. 25. 트윈스타 MOU체결(목포시-LH) - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '09. 05. 22. 트윈스타 개발사업 시행협약 체결 - LH가 요구한 건축비산정 방식에 따라 행정타운 매입 - 주차장시설(47억원) 시 재원으로 건립 - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '09. 07. 22. 공유재산 관리계획승인(시의회) - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '09. 08. 26. 부지매각 및 행정타운 분양계약 체결 - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '10. 11. 15. 트윈스타 건축허가 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '14. 08. 22. 트윈스타 사용승인 - 관련자 : 원도심사업과 8급 조성록, 계장 김수광, 과장 박옥주 ∙ '16. 03. 21. 행정타운 입주 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정인선 도시재생과장 배석인 (061-270-8744)
③정책사업명	가톨릭성지 나눔봉사기념관 조성사업 (2016-17)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2009. 11. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	□ 사업목적 ∙ 가톨릭 성지 내 레지오 마리애 나눔봉사기념관 건립을 통해 역사적·종교적·문화적 가치를 유지하고, 원도심 지역 경제 활성화 및 지역관광 자원화 기여 □ 나눔봉사기념관 사업 현황 ∙ 규 모 : 연면적 8,153㎡, 층수 지하1~지상4층 ∙ 용 도 : 강당, 세미나실, 나눔관, 교육관 ∙ 사업비 : 102억원(천주교 51, 국비 25.5, 도비 10.2, 시비 15.3) □ 추진사항 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 ∙ '16. 12. : 나눔봉사기념관 준공 예정

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-17	담당부서 작성자	(도시개발사업단/도시재생과) (정인선/8744)
정 책 명	가톨릭성지 나눔봉사기념관 조성사업
사업개요	○ 추진배경 - 호남지역 첫 선교지 의미를 복원하고 성지순례의 메카로 발전시키기 위한 성지조성으로 천주교 신자 방문 명소 및 관광객 유치 기여 ○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2016. 12. ○ 사 업 비 : 102억원 ○ 사업규모 : 대지면적 29,729㎡, 연면적 8,153㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) - 관련자 : 원도심사업과 7급 김상문, 계장 김수광, 과장 윤인영 ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 - 관련자 : 원도심사업과 8급 조성록, 계장 김수광, 과장 박옥주 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) - 관련자 : 도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) - 관련자 : 원도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '16. 12. : 나눔봉사기념관 준공 예정 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

사회복지과

②담당자

(전화번호)

운영7급 주영삼

사회복지과장 한순덕    (061-270-8446)

③정책사업명

목포시보훈회관 건립  (2016-18)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2014.08 ~

2017.11

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및

운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017

○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층 (호남동 9-3외 8필지)

○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원)

□ 추진사항

○ 목포시 공유재산심의회 심의              ‘14.  9월

○ 목포시 지방재정 투․융자 심사           ‘14. 10월

○ 지방보훈회관 건립지원 요청 (국가보훈처)  ‘15.  3월

○ 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴        ‘15.  5월

○ 도시관리계획 결정 변경용역 착수         ‘15.  6월

○ 목포시 용역과제 사전심의                 ‘15. 10월

○ 기본 및 실시설계용역 착수               ‘15.11~’16.4월

○ 2016년 지방보훈회관 건립 지원사업 가내시  ‘15. 12월

□예비순위 : 가평군, 마포구청, 목포시, 포천시

□ 추진계획

○ 건립부지내 국유지 무상귀속, 국유지 매입  ‘16. 07월

○ 기본 및 실시설계용역 정지 해제 요청      ‘16. 08월

○ 토지분할 (목포시노인회관/노인복지관)     ‘16. 09월

○ 계약체결, 공사시행 및 준공               ‘16 ~ 17년

□ 연차별 투자 계획

재원별	총 사업비	2015년	2016년	2017년	비 고
계	1,700	152	450	1,098	국가보훈처 지방보훈 회관 건립사업 지원 최대 5억원 지원 건의 (총 사업비 30%)
국 비	500		250	250
시 비	1,200	152	200	848

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-18	담당부서 작성자	(자치행정복지국/사회복지과) (주영삼 / 061-270-8446)
정 책 명	목포시보훈회관 건립
사업개요	○ 추진배경 - 現 보훈회관이 40년이상된 노후화된 건물로 시설규모가 협소 □8개 보훈단체중 3개단체만 입주, 5개단체 개인 건물이용 유상사용 - 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및 운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2017 ○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원) ○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층 (호남동 9-3외 8필지)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 8. . : 목포시 보훈회관 건립계획 확정 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 9. . : 목포시 공유재산심의회 심의 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 10. . : 목포시 지방재정 투융자심사 - 관련자 : 사회복지과 이기훈, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 3. . : 지방보훈회관 건립지원 요청(국가보훈처) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 5. . : 도시관리계획 결정 변경 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 5. . : 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 10. . : 목포시 용역과제 사전심의 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 10. . : 2016년 본예산 확보 (2억원) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 11. . : 국유지 무상귀속 요청 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 11. . : 기본 및 실시설계용역 발주 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘16. 3. . : 설계용역 반영요청 (보훈단체 요구사항 협의) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김현진, 과장 한순덕 ○ ‘16. 4. . : 건립부지내 국유지 무상귀속 및 양여 요청 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김현진, 과장 한순덕

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

노인장애인과

②담당자

(전화번호)

복지9급 이종훈

노인장애인과장 선종삼    (061-270-3341)

③정책사업명

노인회관 / 노인복지관 신축 이전 (2016-19)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015 ~

2017. 12월

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○원도심 지역에 목포시노인복지관(노인회관/노인복지관)을 이전하여 지역사회 노인들의 다양한 복지욕구가 체계적이고 복합적으로 제공될 수 있도록 서비스 기능 확대 추진

□ 사업개요

○ 기   간  : 2015～2017(3년)

○ 장   소  : 호남동 9-6번지 외 8필지(중앙주차장 일부)

○ 규   모  : 부지 1,000㎡ 이내, 연면적 1,960㎡( 1동 지하1층/지상 4층)

○ 사 업 비 : 36억원(용역비, 감리비, 건립비))

□ 추진사항

○ 공유재산관리계획 승인(시의회)     : ‘14. 11. 19

○ 도시관리계획(주차장) 결정변경 용역 : ‘15. 2. 5 ~ 7. 4(5개월간)

○ 목포시 지방재정투자 심사(적정)    : ‘15. 06. 15

○ 기본 및 실시설계 용역 착수      : ‘15. 11. 17

□ 추진계획

○ 용역보고회 개최 : ‘16. 6월

○ 건설기술 심의 및 계약심사 : ‘16. 8월 ~ 9월

○ 공사 착공 및 준공 : ‘17. 1월 ~ ’17. 12월

□ 연차별 투자 계획                         (단위 : 억원)

구분	계		2015		2016		2017
	예산	확보	예산	확보	예산	확보	예산	확보
계	36	6.5	1.5	1.5	5	5	29.5
국비
도비
시비	33	6.5	1.5	1.5	5	5	26.5

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-19	담당부서 작성자	(자치행정복지국/노인장애과) (이종훈 / 061-270-3341)
정 책 명	노인회관 / 노인복지관 신축 이전
사업개요	○ 추진배경 - 노후되고 협소한 노인회관/ 노인복지관을 신축 이전하여 원도심 지역 노인들에게 다양한 복지서비스를 제공코자 함. ○ 추진기간 : 2015년～2017년(3년) ○ 총사업비 : 36억원 ○ 사 업 량 : 부지 1,000㎡ 이내, 연면적 1,960㎡( 1동 지하1층/지상 4층)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 11. 19 : 공유재산관리계획 승인 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 김경만, 과장 김혜자 ○ ‘15. 2. 5 ~ ’15. 7. 4 : 도시관리계획(주차장)결정변경 용역 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 김만재, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 6. 15 : 목포시 지방재정투자 심사 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 11. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (전화번호)	시설8급 김현곤 관광과장 조건형 (061-270-8217)
③정책사업명	고하도 유원지 조성사업 (2016-20)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2008 ~ 2017
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○천혜의 자연조건과 이충무공 유적지가 있는 고하도를 친환경적 체류형 국제 관광휴양지로 개발하고자 함. □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원 ○ 규 모 : 고하도 2,209,345㎡ ○ 사업기간 : 2008년 ～ 2017년 ○ 사 업 비 : 1,128억원(국비 92, 도비 3, 시비 88, 민자 945) □ 추진사항 ○ ‘08. 4 : 도시계획시설(유원지) 조성계획 변경 결정 ○ ‘08. 6 : 공공부문(도로 등 기반시설) 실시계획 인가 고시 ○ ‘08. 8 ~‘15. 3 : 도로개설(L=5.17㎞), 주차장(54면) 조성 ○ ‘16. 5 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 추진 □ 세부내역 ○ 공공 : 도로, 주차장 ○ 민간 : 충무공연수원, 테마파크, 숙박시설, 케이블카, 마리나, 골프장(9홀), 상업시설 등 □ 추진계획 ○ ’16. 6 : 고하도 휴양시설 민간사업자 전국 공모 ○ ’16. 12 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 ○ ’17. 6 : 고하도 낚시광장 조성사업 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (전화번호)	시설6급 김광호 관광과장 조건형 (061-270-8216)
③정책사업명	목포 해상케이블카 설치 사업 (2016-21)
④선정기준	주요시정현안	⑤사업기간	2016 ~ 2017
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○자연경관이 수려한 유달산과 고하도간 해상케이블카를 설치하여 우리시의 랜드마크적인 관광인프라 구축 □ 사업개요 ○ 위 치 : 유달산 일원 ~ 고하도 일원 ○ 구 간 : 유달산 리라유치원 앞 ↔ 마당바위 밑(관운각 인근) ↔ 고하도 ○ 연 장 : 총 3.36㎞(해상 0.82, 육상 2.54) ○ 시행방법 : 민간자본유치[총510억원(시설비 490, 실시설계 20)] ○ 사업기간 : 2016 ~ 2017 □ 추진사항 ○ 2015. 4 ~ 9 : 해상케이블카 타당성 검토 및 기본구상 용역 수행 ○ 2015. 6 : 시민여론조사 시행(시민 74.4% 필요성 공감) ○ 2015. 7 : 공청회 2회 개최 ○ 2015. 10 : 해상케이블카 민간사업자 모집 공고 ○ 2016. 3 : 실시협약 체결 ○ 2016. 5 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 발주 □ 추진계획 ○ 2016. 5 ~ 2016. 10 : 고하도 유원지 조성계획 변경 및 도시관리계획 결정 ⇒ 도시계획심의, 환경영향평가, 교통영향평가, 관계기관 및 부서 협의 등 ○ 2016. 11 ~ 12 : 해상케이블카 실시계획 인가 ○ 2017. 1 ~ 12 : 사업 착공 및 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시계획과	②담당자 (전화번호)	시설6급 차태명 도시계획과장 나상원 (061-270-8625)
③정책사업명	2030 목포 도시기본계획 수립 (2016-22)
④선정기준	1억원 이상의 예산이 투입되는 용역, 주요시정현안	⑤사업기간	2015. 12.~ 2017. 2.
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 위치 및 면적 : 목포시 행정구역 전체 112.49㎢ ○ 용 역 비 : 6억원(시비확보) ○ 용역기간 : ‘15. 12 ～ ’17. 2. □ 사업의 목적 ○ 국토종합계획, 광역도시계획 등 상위계획과의 연계강화로 지속가능한 도시발전 기틀 마련 □ 추진상황 ○ 용역계약 : 2015. 12. 10. ○ 착수보고회 개최(MP 위촉장 수여) : 2016. 1. 14. ○ 시민참여단 모집 및 조직구성 : 2016. 4. □ 추진계획 ○ 시민참여단 위촉식 및 1차회의 : 2016. 5. 21. ○ 시민참여단 2차회의 : 2016. 5. 28. ○ 2030 목포도시기본계획 용역 완료 : 2017. 2. □ 연차별 예산 투자 계획 ○ 예산액 : 509백만원(시비) 2016년 : 200백만원 2017년 : 309백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

도시계획과

②담당자

(전화번호)

시설6급 차태명

도시계획과장 나상원     (061-270-8625)

③정책사업명

장기미집행 도시계획시설 타당성 검토 용역 (2016-23)

④선정기준

1억원 이상의 예산이 투입

되는 연구용역

⑤사업기간

2016. 1. ~

2016. 12.

⑥주요내용

□ 추진개요

○ 용역기간 : ‘16. 1. ～ ’16. 12.

○ 용 역 비 : 500백만원(타당성검토 200, 도시관리계획결정 변경 300)

○ 총미집행시설 : 324개소 10,323,000㎡

□ 추진방침

○ 장기미집행 도시계획시설이 단계별 집행계획에 의해 예산이       수립되고 집행되도록 함으로써 일관성 있는 행정 구현

○ 실현 가능성이 없거나 여건변화 등으로 설치 불가능한       도시계획시설에 대한 폐지․조정 등 시민 재산권 보호

□ 추진사항

○ 타당성검토 착수 : 2016. 01

○ 용역 집행계획보고 및 PQ공고 : 2016. 3.

□ 추진계획

○ 사업수행능력평가 및 업체선정 : 2016.  5.

○ 장기미집행 도시계획시설 타당성조사 용역 착수 : 2016. 6.

○ 도시계획시설 단계별집행계획 의회 보고 및 공고 : 2016. 7.

○ 단계별집행계획 및 도시관리계획 결정(변경) 고시 : 2016. 12.

○ 장기미집행 도시계획시설 타당성조사 용역완료 : 2016. 12.

□ 예산 투자계획

구 분	총 계		2016년 추진
	사업량	사업비	사업량	사업비
용역	324개소 10,323,000㎡	300백만원	용역	300백만원

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전총괄과	②담당자 (전화번호)	전산7급 박희진 안전총괄과장김상호 (061-270-3497)
③정책사업명	목포시「CCTV통합관제센터」구축 (2016-24)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2016. 2. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 기관별(목포시, 경찰서, 초등학교) ․ 기능별로 관리·운영중인 CCTV를 통합 관리하여 각종 사건․사고 발생시 신속한 상황 파악 및 대응을 위한 「목포시 CCTV 통합관제센터」 구축 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2016. 2. ~ 12. ○ 구축장소 : 본청 민원동 3층 593.6㎡(180평) ○ 사 업 비 : 총1,536백만원 ‣ 국비 768(50%), 도비 204.3(13%), 시비 476.7(31%), 교육청 87(6%) ○ 사업내용 ‣ 통합관제시스템(HW, SW) 도입 ‣ 관제센터 인테리어, 전기·소화설비, 부대장비 설치 등 ‣ 목포시와 유관기관(경찰서,초등학교) CCTV 시스템 이전 및 연동 ○ 사 업 량 : CCTV 888대 ※ CCTV `16년 신규설치 및 초등학교분 증감 가능 □ 추진계획 ○ 목포시, 초등학교 CCTV 실태조사 용역 : 2015. 12. ~ 2016. 1. ○ 목포시 CCTV통합관제센터 종합추진계획 수립 : 2016. 3. 3. ○ 통합관제센터 구축 설계 : 2016. 3. ~ 5. ○ CCTV연계 관내 초등학교 사전의견 수렴 : 2016. 3. ~ 5. ○ 사업 착공 및 시공 : 2016. 5. ~ 9. ○ 시험운영 및 개관 : 2016. 10.

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (전화번호)	시설8급 이인정 건설과장 이상호 (061-270-3484)
③정책사업명	용해동교회뒤~문고옆간 도로개설 (2016-25)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2010.03.19 ~ 2016.12.31
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ∙ 도시계획도로 개설로 도심내 교통소통 원활 및 원도심과 신도심 지역균형 발전을 도모코자 함. □ 사업개요 ∙ 사 업 량 : L=289m, B=6m ∙ 사 업 비 : 2,000백만원(보상 1,255, 공사 745) ∙ 예산확보 : 1,999백만원 □ 추진사항 ∙ ‘07. 10 : 실시설계 용역완료 ∙ ‘07. 10 : 투융자심사완료 ∙ ‘12. 6 : 실시계획인가(변경) 고시 - 1차 ∙ ‘12. 10 : 1차분 도로개설 L=86m ∙ ‘14. 3 : 2차분 도로개설 L=50m ∙ ‘15. 4 : 실시계획인가(변경) 고시 - 2차 ∙ ‘15. 6 : 편입토지 및 지장물보상(12필지) ∙ ‘15. 10 : 지장물 철거(5동) ∙ ‘16. 3 : 3차분 도로개설 L=153m 추진 ∙ ‘16. 9 : 공사 준공

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-25	담당부서 작성자	(안전도시건설국 / 건설과) (이인정 / 061-270-3484)
정 책 명	용회동교회뒤~문고옆간 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 도시계획도로 개설로 도심내 교통소통 원활 및 원도심과 신도심 지역균형 발전을 도모코자 함. ○ 추진기간 : 2010. 3. 19 ~ 2016. 12. 31 ○ 총사업비 : 2,000백만원 ○ 사 업 량 : L=298m, B=6m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘07. 10 : 실시설계 용역완료 - 관련자 : 건설방재과 실무관 박치현, 책임관 정종위, 과장 조용선 ○ ‘07. 10 : 투융자심사완료 - 관련자 : 건설방재과 실무관 김선희, 책임관 황경식, 과장 조용선 ○ ‘12. 6 : 실시계획인가(변경) 고시 - 1차 - 관련자 : 건설방재과 실무관 김용균, 책임관 김형석, 과장 박동길 ○ ‘12. 10 : 1차분 도로개설 L=86m - 관련자 : 건설방재과 실무관 김용균, 책임관 김형석, 과장 박동길 ○ ‘14. 3 : 2차분 도로개설 L=50m - 관련자 : 건설방재과 실무관 정봉채, 책임관 박금재, 과장 박동길 ○ ‘15. 4 : 실시계획인가(변경) 고시 - 2차 - 관련자 : 건설방재과 실무관 정봉채, 책임관 박금재, 과장 박동길 ○ ‘15. 6 : 편입토지 및 지장물보상(12필지) - 관련자 : 건설과 실무관 정봉채, 책임관 이상선, 과장 김 준 ○ ‘15. 10 : 지장물 철거(5동) - 관련자 : 건설과 실무관 진헌민, 책임관 이상선, 과장 김 준 ○ ‘16. 3 : 3차분 도로개설 L=153m 추진 - 관련자 : 건설과 실무관 이인정, 책임관 이충완, 과장 이상호 ○ ‘16. 9 : 공사 준공 - 관련자 : 건설과 실무관 이인정, 책임관 이충완, 과장 이상호

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

교통행정과

②담당자

(전화번호)

시설7급 나창영

교통행정과장 박경연

061-270-8293)

③정책사업명

화물자동차 공영차고지 건립 (2016-26)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015.05.00 ~   2018.12.00

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 화물물류기지로서의 역할을 수행할 수 있는 화물 공영차고지      확충으로 지역간 균형개발을 도모하고, 불법주정차 민원      해결을 통한 쾌적한 교통 환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 대양동 대양일반산업단지 내

○ 사 업 량 : 91,510㎡(27,682평)

600대(주차장, 휴게·정비·관리동 등)

○ 사 업 비 : 360억원(부지매입 244, 공사비 등 116)

- 재   원 : 국비(지특) 252억원(70%), 시비 108억원(30%)

□ 추진사항

○ ‘15.  5. : 중앙 투자심사 승인(행자부)

○ ‘15.  6. : 공유재산심의 완료

○ ‘15. 10. : 중기지방재정 반영

○ ‘15. 12. : 산단업종(개발계획) 변경

○ ‘16.  4 : 부지 일부매입

□ 추진계획

○ ‘16.  9 : 기본 및 실시설계 등 행정절차이행

○ ‘16. 10 ∼ ‘18. 12 : 화물자동차 공영주차장 조성

□ 연차별 예산 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		2015년 까지		2016년 추진		2017년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
차고지 건립	차고지	36,000	타당성 용역	20	공사	11,400	공사	24,580

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	교통행정과	②담당자 (전화번호)	공업7급 박철우 교통행정과장 박경연 (061-270-8294)
③정책사업명	목포시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 (2016-27)
④선정기준	1억원 이상의 예산이 투입 되는 연구용역	⑤사업기간	2016.04.14 ~ 2016.12.18
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 우리시의 교통여건을 정확하게 분석하여 실현가능하고 미래 지향적인 지능형 교통체계 구축 로드맵을 마련하기 위함 □ 사업개요 ○ 용역기간 : 2016. 4. ~ 12.(8개월) ○ 용역범위 : 목포시 도심전역 및 인근 교통영향권역 ○ 용 역 비 : 98,500천원 ○ 용 역 사 : 한국지능형교통체계협회 ○ 용역내용 - 지능형 교통체계의 구축목표 및 기본방향 - 교통서비스별, 육상․해상․항공 등 분야별 지능형 교통체계 구축전략 - 지능형 교통체계 구축 우선순위에 따른 기본설계, 재원확보 방안 제시 등 □ 추진사항 ○ ‘15. 10. : 지능형교통체계 기본계획 수립용역 용역사전심의 완료 ○ ‘16. 03. : 지능형교통체계기본계획 수립용역 행정절차 이행 ○ ‘16. 04. : 용역 계약 및 착수 □ 추진계획 ○ ‘16. 5. ~ 6. : 연구계획 수립 및 현황조사 ○ ‘16. 7. ~ 12. : 현황분석 및 기본설계, 국토교통부 승인 □ 기대효과 ○ 공간적․시간적 환경변화에 대응가능한 ITS 기본계획을 수립하여 “사람” 중심의 신속․편리․안전한 지능형 교통체계구축 기반 조성

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	공원녹지과	②담당자 (전화번호)	녹지7급 장복천 공원녹지과장 김진호 (061-270-3514)
③정책사업명	녹색 쌈지공원 조성 (2016-28)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2016.~ 2016.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○생활권 주변의 자투리 공간을 활용하여 숲 공간으로 조성 하여 숲과 더불어 행복한 녹색도시 목포 조성과 숲 네트 워크를 통한 숲의 녹색서비스 강화 및 녹색공간의 질적 향상을 극대화 하기 위함. □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 상동 1080외 ○ 규 모 : 도민의 숲 조성 등 13건(2.5ha) ○ 형 태 : 도시숲, 가로화단, 쌈지숲 조성 등 ○ 사 업 비 : 1,000백만원(광특 500, 시비 500) □ 추진사항 ○ 2016. 2. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계 완료 ○ 2016. 3. ~ 4. : 공사 착공 및 발주 ○ 2016. 4. ~ 5. : 하당 경관녹지조성 등 8개소 준공 □ 추진계획 ○ 2016. 5. ~ 6. : 하당 도시숲 정비 등 공사 착공 ○ 2016. 10. ~ 11. : 공사 준공 예정

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-28	담당부서 작성자	(안전도시건설국 / 공원녹지과) (녹지7급 장복천 / 061-270-3514)
정 책 명	녹색 쌈지공원 조성
사업개요	○ 추진배경 - 생활권 주변의 자투리 공간을 활용하여 숲 공간으로 조성 하여 숲과 더불어 행복한 녹색도시 목포 조성과 숲 네트 워크를 통한 숲의 녹색서비스 강화 및 녹색공간의 질적 향상을 극대화 하기 위함. ○ 추진기간 : 2016. ○ 총사업비 : 1,000백만원(지특 500, 시비 500) ○ 사 업 량 : 도민의 숲 조성 등 13개소(2.5ha)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 1. 27. : 2016년 도시녹하 사업 계획보고 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 2. 12 . : 현장조사 및 실시설계 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 2. 24. : 하당 연결녹지 외 1개소 입찰 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 3. 24. : 옥암수변 사색의 숲 조성 등 공사준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 5. 1. : 용당 가로변 경관숲 조성 등 8개사업 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	공원녹지과	②담당자 (전화번호)	녹지7급 전욱형 공원녹지과장 김진호 (061-270-8344)
③정책사업명	입암산 ~ 용라산 산맥연결(생태통로) 사업 (2016-29)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2015.~ 2017.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○입암산과 용라산 사이 백년로 단절구간 산맥연결사업 추진으로 단절된 산림생태축 연결, 부족한 등산 여가공간 확충, 트레킹길 기반구축 등 활력있는 사시 산림 문화공간 창출 □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 상동 1080, 용해동 970(백년로 상단) ○ 규 모 : 산맥연결 1식 (L=100m, B=35m) ○ 형 태 : 생태통로 조성후 상부 수목 식재 ○ 사 업 비 : 3,600백만원(광특 1,800, 시비 1,800) □ 추진사항 ○ 2015. 6. 19 : 지방재정 투자심사(적정) ○ 2015. 7. 14 : 실시설계 용역 착수 ○ 2015. 11. 25 : 실시설계 중간 보고회 개최 □ 추진계획 ○ 2016. 10월 : 실시설계 용역 준공 ○ 2016. 11. ~12월 : 공원조성계획 변경 및 실시계획 인가 ○ 2017. 1월 : 공사 발주 ○ 2017. 12월 : 공사 준공 예정

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-29	담당부서 작성자	(안전도시건설국 / 공원녹지과) (전욱형 / 061-270-8344)
정 책 명	입암산 ~ 용라산 산맥연결(생태통로) 사업
사업개요	○ 추진배경 - 도로개설로 인한 단절된 산림의 생태적 복원과 지역주민들의 산리문화 여가환경 확충과 도시경관 개선에 기여 ○ 추진기간 : 2015 ~ 2017 ○ 총사업비 : 3,600백만원(지특 1,800, 시비 1,800) ○ 사 업 량 : 생태다리 연결 1식(L=100m, B=35m)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15. 6. 19. : 지방재정 투융자심사 완료 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 7. 14 . : 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 9. 9. : 실시설계 착수 보고회 개최 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 11. 25. : 실시설계 중간 보고회 개최 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘16. 10. . : 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘16. 11. . : 공원조성계획 변경 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘16. 12. . : 실시계획 인가 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘17. 1. . : 공사 착공 예정 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘17. 12. . : 공사 준공 예정 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

스포츠산업과

②담당자

(전화번호)

시설6급 김상문

스포츠산업과장 김종진       (061-270-3677)

③정책사업명

목포야구장 건립 (2016-30)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015.01.01 ~   2017.12.30

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 대양산단 진입도로 개설에 따른 접근성 향상과 축구센터의

스포츠마케팅 확충시너지 효과

○ 야구동호인의 생활야구 활성화 저변확대

□ 사업개요

○ 위    치 : 대양동 958번지 일원(목포국제축구센터 옆)

○ 규    모 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)

○ 조성시설 : 야구장(울타리), 덕아웃, 주차장, 기타 부대시설

○ 총사업비 : 3,900백만원(국비 400, 시비 3,500)

□ 추진사항

○ '15. 01.～12. : 야구장 도시계획시설결정 및 조성사업 설계용역

○ '15. 03. : 시의회 공유재산 관리계획 승인

○ '15. 06. : 지방재정 투자심사 승인

○ '15. 11. : 시도시관리계획(체육시설)결정 심의

○ '16. 01. : 건설기술심의

□ 추진계획

○ '16. 05. : 도시관리계획(체육시설)결정 고시

○ '16. 06. : 실시계획인가 신청, 토지분할(측량)

○ '16. 07. : 실시계획인가 고시, 편입부지 감정평가

○ '16. 08 : 토지매입(협의) 및 보상

○ '16. 하반기 : 사업예산 확보, 공사발주 및 착공

□ 연차별 예산 투자 계획

구 분	총 계		2016년 추진		2017년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
공사 및 보상	12,900㎡ (99m×122m)	3,900	공사 및 보상	2,400	보상	1,500

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-30	담당부서 작성자	(교육문화사업단 / 스포츠산업과) (김상문 / 061-270-3677)
정 책 명	목포야구장 건립
사업개요	○ 추진배경 : 생활야구 활성화 및 지방체육시설 확충 ○ 추진기간 : 2015. 01. 01. ～ 2017. 12. 31. ○ 총사업비 : 3,900백만원(국비 400, 시비3,500) ○ 사 업 량 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15.01.01.～15.12.31. : 야구장 조성관련 설계용역 실시 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준/이용대, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ※ 용역내용 - 4건(용역감독 도시계획과 차태명) - 야구장건립 도시관리계획시설(체육시설)결정 수립 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 교통 및 재해성검토 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 전략환경영향평가 용역 - 목포시 야구장 조성사업을 위한 기본 및 실시설계용역 ○ ‘15.03.18. : 시의회 공유재산 관리계획 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.06.15. : 목포시 지방재정 투자심사 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.11.27. : 도시관리계획(체육시설)결정 심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ○ ‘16.01.07. : 지방건설기술심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ※ 도시관리계획(체육시설)결정 고시 추진 중 - 도시계획과

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

남해환경관리과

②담당자

(전화번호)

공업7급 김준희

남해환경관리과장문동배

(061-270-4185)

③정책사업명

남해하수처리장 악취방지 사업 (2016-31)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2016.01.01 ~   2018.12.31

⑥주요내용

□ 사업의 목적

ㅇ하수처리장 기술 및 악취진단 결과 시설의 개량, 효율화, 악취 저감하여 유해가스에 의한 안전사고 예방하고 주변 주민들의 악취 민원 해소

ㅇ효율적인 악취방취사업 추진으로 하수 가스에 의한 시설설비의 노후화 예방 및 혐오시설에 대한 의식 개선

□ 사업개요

ㅇ사업비 : 2,248백만원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%)

ㅇ사업기간 : ‘16. 1. ~ ’18. 12.

ㅇ사업내용 : 탈취기 교체 및 밀폐형 덮게 설치, 악취발생 시설 교체 등

□ 추진사항

ㅇ2015. 3. : 환경부 국비신청

ㅇ2015. 9. : 정부 예산안 확정(2,248백만원)

ㅇ2016. 1. : 남해하수처리장 악취방지 사업 실시설계 용역

ㅇ2016. 2. : 국비 교부결정-10억원(국 5억/도 0.5억 / 시 4.5억)

ㅇ2016. 2. : 2017년도 예산신청(12.48억)

□ 추진계획

ㅇ2016. 5. ~ 6. : 환경부 재원협의 및 계약심사

ㅇ2016. 7. : 2016년도 사업 발주(탈취기 교체, 밀폐형 덮게 설치)

ㅇ2016. 12. : 2016년도 사업 준공

ㅇ2017. 1. : 2017년도 사업 착공

□ 연차별 예산 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2016년도	2017년도	2018년도
총 계	2,248	1,000	1,248	-
국 비	1,124	500	624	-
도 비	112.4	50	62.4	-
시 비	1,011.6	450	561.6	-

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기간 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김신철 도시재생과장 배석인 (061-270-3684)
③정책사업명	도시재생 전략계획 및 선창권 도시재생 활성화 계획 수립 용역(2016-32)
④선정기준	1억원 이상 용역	⑤사업기간	2016. 3 ~ 2017. 3
⑥주요내용	□ 추진배경 및 목적 ○ 2018년 수협의 북항권 이전에 따른 선창권 공동화 현상의 대책마련을 위해 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시재생 일반지역으로 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반 조성 □ 사업개요 ○ 용역범위 - 전략계획 : 목포시 전역 - 선창권 활성화계획 : 선창 일원(면적 600,000㎡) ○ 용역비 : 429백만원 ○ 용역기간 : 2016. 3. 3 ~ 2017. 3. 2(12개월) ○ 주요내용 • 목포시 도시재생 전략계획 1식 • 선창권 도시재생 활성화계획 1식 • 주민역량강화 1식 ○ 용역사 : (주)대한콘설탄트, 디자인 연구소 두다 □ 추진현황 ○ 2016. 1. 8 : 입찰공고 ○ 2016. 2. 5 : 우선협상대상자 선정 ○ 2016. 3. 3 : 용역착수 ○ 2016. 3. 25 : 용역착수보고회 ○ 2016. 4. 25 : 주민설명회 개최

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-32	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김신철/061-270-3684)
정 책 명	도시재생 전략계획 및 선창권 도시재생 활성화 계획 수립 용역
사업개요	○ 추진배경 - 2018년 수협의 북항권 이전에 따른 선창권 공동화 현상의 대책마련을 위해 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시재생 일반지역으로 선정, 경제활력 회복과 일자리창출을 위한 기반 조성 ○ 추진기간 : 2016 ~ 2017 ○ 용 역 비 : 429백만원 ○ 주요내용 • 도시재생 전략계획 1식 • 선창권 도시재생 활성화계획 1식 • 주민역량강화 1식
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 12. 24 : 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 7 : 용역 추진계획 검토보고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2016. 1. 8 : 입찰공고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 13 : 제안서 평가위원 공개모집 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 2. 5 : 정성적 평가 및 우선협상대상자 선정 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭 ○ 2016. 2. 22 : 계약체결 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 3 : 용역착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 25 : 용역 착수보고회 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 단장 심인섭 ○ 2016. 4. 25 : 주민설명회 개최 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 단장 심인섭

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	도시재생과장 배석인 시설8급 김선웅 (061-270- 3649)
③정책사업명	목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역(2016-33)
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2016. 1. 14. ~ 2017. 1. 12.
⑥주요내용	○ 과업목적 - 2012년 결정 고시된「목포 서산․온금재정비촉진계획」에 대하여 그동안 변화된 대외여건과 지역정서 등을 반영하고, 계획운용상 나타난 일부 불합리한 요소들을 관계법령·지침에 적합하도록 정비하여, - 노후 및 불량주택이 밀집된 서산ㆍ온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간 조성을 위한 종합기본계획을 변경 수립 ○ 용역개요 - 용 역 명 : 목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역 - 과업위치 : 서산․온금동 일원 - 과업범위 : 388,463㎡(서산․온금 재정비촉진지구 내) - 과업내용 : 촉진계획 변경, 교통성 검토, 경관상세계획, 교육영향평가 등 - 과업기간 : 2016. 1. 14. ~ 2017. 1. 12. - 용 역 비 : 307백만원

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-33	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김선웅 / 061-270-3649)
정 책 명	목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역
사업개요	○ 추진목적 - 2012년 결정 고시된「목포 서산․온금재정비촉진계획」에 대하여 그동안 변화된 대외여건과 지역정서 등을 반영하고, 계획운용상 나타난 일부 불합리한 요소들을 관계법령·지침에 적합하도록 정비 ○ 추진기간 : 2016. 1. 14 ~ 2017. 1. 12 ○ 총사업비 : 307백만원 ○ 주요내용 - 촉진계획 변경, 교통성 검토, 경관상세계획, 교육영향평가 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 11. 4. : 전라남도 계약심사 - 관련자 : 전라남도 회계과 주무관 조준, 계약심사담당 정현인, 과장 유영걸 ○ 2015. 11. 10. : 목포시 일상감사 - 관련자 : 감사실 실무관 박재홍, 계장 황용규, 과장 한순덕 ○ 2015. 11. 11. : 용역 추진계획 보고 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김방선, 과장 배석인, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 12. 8. : 사업수행능력평가 자제평가위원회 심의 - 관련자 : 위원장 도시개발사업단장 심인섭, 위원 도시계획과장 나상원, 건설과장 김준, 도시개발과장 박금재 ○ 2016. 1. 14. : 용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김방선, 과장 배석인

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시개발과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김기복 도시개발과장 김형석 (061-270-3434)
③정책사업명	임성지구 도시개발사업 (2016-34)
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2013년~2020년
⑥주요내용	○ 위 치 : 목포시 석현동, 옥암동 일원 ○ 규 모 : 1,979,000㎡(60만평) ○ 계획인구 : 2만명(7,920세대) ○ 시행방식 : 혼용방식(환지 및 수용), SPC 설립 운영 ○ 사 업 비 : 2,335억원 (공사비1,100/보상비414/부담금442/용역비 등 기타379)

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기간 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재