[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

사회복지과

②담당자

(전화번호)

사회복지과장

행정5급 한순덕

운영7급 주영삼          (8446)

③정책사업명

목포시보훈회관 건립

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2014.08 ~

2017.11

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및

운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017

○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층

○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원)

□ 추진사항

○ 목포시 공유재산심의회 심의               ‘14.  9월

○ 목포시 지방재정 투․융자 심사            ‘14. 10월

○ 지방보훈회관 건립지원 요청 (국가보훈처)   ‘15.  3월

○ 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴         ‘15.  5월

○ 도시관리계획 결정 변경용역 착수          ‘15.  6월

○ 목포시 용역과제 사전심의                  ‘15. 10월

○ 기본 및 실시설계용역 착수               ‘15.11~’16.4월

○ 2016년 지방보훈회관 건립 지원사업 가내시  ‘15. 12월

□예비순위 : 가평군, 마포구청, 목포시, 포천시

□ 추진계획

○ 건립부지내 국유지 무상귀속, 국유지 매입  ‘16. 07월

○ 기본 및 실시설계용역 정지 해제 요청      ‘16. 08월

○ 토지분할 (목포시노인회관/노인복지관)      ‘16. 09월

○ 계약체결, 공사시행 및 준공               ‘16 ~ 17년

□ 연차별 투자 계획

재원별	총 사업비	2015년	2016년	2017년	비 고
계	1,700	152	450	1,098	국가보훈처 지방보훈 회관 건립사업 지원 최대 5억원 지원 건의 (총 사업비 30%)
국 비	500		250	250
시 비	1,200	152	200	848

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-	담당부서 작성자	(자치행정복지국/사회복지과장) (주영삼 / 8446)
정 책 명	목포시보훈회관 건립
사업개요	○ 추진배경 - 現 보훈회관이 40년이상된 노후화된 건물로 시설규모가 협소 □8개 보훈단체중 3개단체만 입주, 5개단체 개인 건물이용 유상사용 - 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및 운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2017 ○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원) ○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 8. . : 목포시 보훈회관 건립계획 확정 - 관련자 : 사회복지과 이기훈, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 9. . : 목포시 공유재산심의회 심의 - 관련자 : 사회복지과 이기훈, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 10. . : 목포시 지방재정 투융자심사 - 관련자 : 사회복지과 이기훈, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 3. . : 지방보훈회관 건립지원 요청(국가보훈처) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 5. . : 도시관리계획 결정 변경 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 5. . : 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 10. . : 목포시 용역과제 사전심의 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 10. . : 2016년 본예산 확보 (2억원) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 11. . : 국유지 무상귀속 요청 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 11. . : 기본 및 실시설계용역 발주 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘16. 3. . : 설계용역 반영요청 (보훈단체 요구사항 협의) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김현진, 과장 한순덕 ○ ‘16. 4. . : 건립부지내 국유지 무상귀속 및 양여 요청 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김현진, 과장 한순덕