[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

노인장애인과

②담당자

(전화번호)

복지9급 이종훈

노인장애인과장 선종삼    (061-270-3341)

③정책사업명

노인회관 / 노인복지관 신축 이전 (2016-19)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015 ~

2017. 12월

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○원도심 지역에 목포시노인복지관(노인회관/노인복지관)을 이전하여 지역사회 노인들의 다양한 복지욕구가 체계적이고 복합적으로 제공될 수 있도록 서비스 기능 확대 추진

□ 사업개요

○ 기   간  : 2015～2017(3년)

○ 장   소  : 호남동 9-6번지 외 8필지(중앙주차장 일부)

○ 규   모  : 부지 1,000㎡ 이내, 연면적 1,960㎡( 1동 지하1층/지상 4층)

○ 사 업 비 : 36억원(용역비, 감리비, 건립비))

□ 추진사항

○ 공유재산관리계획 승인(시의회)     : ‘14. 11. 19

○ 도시관리계획(주차장) 결정변경 용역 : ‘15. 2. 5 ~ 7. 4(5개월간)

○ 목포시 지방재정투자 심사(적정)    : ‘15. 06. 15

○ 기본 및 실시설계 용역 착수      : ‘15. 11. 17

□ 추진계획

○ 용역보고회 개최 : ‘16. 6월

○ 건설기술 심의 및 계약심사 : ‘16. 8월 ~ 9월

○ 공사 착공 및 준공 : ‘17. 1월 ~ ’17. 12월

□ 연차별 투자 계획                         (단위 : 억원)

구분	계		2015		2016		2017
	예산	확보	예산	확보	예산	확보	예산	확보
계	36	6.5	1.5	1.5	5	5	29.5
국비
도비
시비	33	6.5	1.5	1.5	5	5	26.5

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-19	담당부서 작성자	(자치행정복지국/노인장애과) (이종훈 / 061-270-3341)
정 책 명	노인회관 / 노인복지관 신축 이전
사업개요	○ 추진배경 - 노후되고 협소한 노인회관/ 노인복지관을 신축 이전하여 원도심 지역 노인들에게 다양한 복지서비스를 제공코자 함. ○ 추진기간 : 2015년～2017년(3년) ○ 총사업비 : 36억원 ○ 사 업 량 : 부지 1,000㎡ 이내, 연면적 1,960㎡( 1동 지하1층/지상 4층)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 11. 19 : 공유재산관리계획 승인 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 김경만, 과장 김혜자 ○ ‘15. 2. 5 ~ ’15. 7. 4 : 도시관리계획(주차장)결정변경 용역 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 김만재, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 6. 15 : 목포시 지방재정투자 심사 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 11. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자