[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정성훈 하수과장 권장주 (061-270-8627)
③정책사업명	상하수도(남악신도시 하수처리장 증설사업) 2016-9
④선정기준	10억원 이상 건설사업	⑤사업기간	2013년~2018년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속증가에 따른 하수처리량 증가로 하수처리시설 증설 - 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지 일원 - 사업비 : 26,547백만원(목포시 11,609, 전남개발공사 14,938) - 사업기간 : 2013년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 시설용량 10,000㎥/일 증설 ○ 사업추진현황 - ‘13. 2. 26 : 하수처리장 증설사업 계획보고 - ‘13. 4. 15 : 하수처리장(2단계) 증설에 따른 협약 - ‘13. 5. 9 : 기본 및 실시설계 용역착수 - ‘13. 8. 1 : 도 투·융자 심사 조건부 승인 - ‘13. 8. 30 : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정(무안군, 전남개발공사) - ‘14. 7. 28 : 지반조사용역 완료 - ‘14. 12. 15 : 설계 경제성(VE) 검토 - ‘15. 1. 29 : 전라남도 건설기술심의 - ‘15. 3. 26 : 기본 및 실시설계용역 준공 - ‘15. 5. 26 : 조달청 원가심사 - ‘15. 6. 15 : 일상감사 - ‘15. 7. 14 : 공공하수도설치(변경) 인가 - ‘15. 9. 22 : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 12. 9 : 총괄분 및 1차분 착공 - ‘16. 4. 29 : 2차분 착공 - ‘16. 6. 21 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-09	담당부서 작성자	(상하수도사업단 / 하수과) (정성훈/061-270-8627)
정 책 명	남악신도시 하수처리장 증설사업
사업개요	○ 추진배경 - 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속증가에 따른 하수처리량 증가로 하수처리시설 증설 ○ 추진기간 : 2013 ~ 2018 ○ 총사업비 : 26,547백만원 ○ 주요내용 : 시설용량 10,000㎥/일 증설
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 13. 2. 26 : 하수처리장 증설사업 계획보고 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 4. 15 : 하수처리장(2단계) 증설에 따른 협약 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 5. 9 : 기본 및 실시설계 용역착수 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 8. 1 : 도 투·융자 심사 조건부 승인 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 이상호, 과장 손상돈 ○ 13. 8. 30 : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정(무안군, 전남개발공사) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 이상호, 과장 손상돈 ○ 14. 7. 28 : 지반조사용역 완료 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 15 : 설계 경제성(VE) 검토 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 1. 29 : 전라남도 건설기술심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 3. 26 : 기본 및 실시설계용역 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 5. 26 : 조달청 원가심사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 6. 15 : 일상감사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 7. 14 : 공공하수도설치(변경) 인가 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 9. 22 : 목포시 계약심의위원회 심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 15. 12. 9 : 총괄분 및 1차분 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 16. 4. 29 : 2차분 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 6. 21 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주