정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-07	담당부서 작성자	(교육문화사업단 / 교육체육과) (유재희 / 061-270-3677)
정 책 명	목포야구장 건립
사업개요	○ 추진배경 : 생활야구 활성화 및 지방체육시설 확충 ○ 추진기간 : 2015. 01. 01. ～ 2017. 12. 31. ○ 총사업비 : 4,900백만원(국비 400, 시비4,100) ○ 사 업 량 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15.01.01.～15.12.31. : 야구장 조성관련 설계용역 실시 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준/이용대, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ※ 용역내용 - 4건(용역감독 도시계획과 차태명) - 야구장건립 도시관리계획시설(체육시설)결정 수립 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 교통 및 재해성검토 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 전략환경영향평가 용역 - 목포시 야구장 조성사업을 위한 기본 및 실시설계용역 ○ ‘15.03.18. : 시의회 공유재산 관리계획 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.06.15. : 목포시 지방재정 투자심사 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.11.27. : 도시관리계획(체육시설)결정 심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ○ ‘16.01.07. : 지방건설기술심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ○ ‘16.05.26. : 도시관리계획(체육시설)변경 결정 및 고시 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘16.08.05. : 도시계획사업(야구장) 실시계획인가 고시 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘16.09.28. : 편입부지 보상열람 공고 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘17.01.12. : 건립공사 착공 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진