정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	(2018-47) 남해하수처리장 악취방지 사업
② 추진배경	ㅇ 하수처리장 기술 및 악취진단 결과 시설의 개량, 효율화, 악취 저감하여 유해가스에 의한 안전사고 예방하고 주변 주민들의 악취 민원 해소 ㅇ 효율적인 악취방취사업 추진으로 하수 가스에 의한 시설설비의 노후화 예방 및 혐오시설에 대한 의식 개선
③ 사업개요	○ 사 업 비 : 2,248백만원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%) ○ 사업기간 :‘16. 1. ~ ’18. 12. ○ 사업내용 : 탈취기 교체 및 밀폐형 덮게 설치, 악취발생 시설 교체 등
④ 사업부서	남해환경관리과		⑤ 담당자		공업7급 안치현 남해환경관리과장 문명식
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업		⑦ 사업기간		2016년~2018년
<그간 주요 추진내용>
환경부 악취방지 사업 국비신청		2015. 3. 10		실무관 김성기, 책임관 김용근, 과 장 문동배
정부 예산안 확정(2,248백만원)		2015. 9. 30		실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
실시설계 용역착수		2016. 1. 11.		실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2016년도 사업비 국․도비 교부결정		2016. 2. 26		실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2017년도 예산신청		2016. 2. 19		실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배

<그간 주요 추진내용>
환경부 재원협의 및 전라남도 설계자문 의뢰	2016. 7. 11	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
전라남도 실시설계 용역 설계자문 완료	2016. 8. 18	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
환경부 재원 협의 완료	2016. 9. 6	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
전라남도 계약심사 완료	2016. 9. 28	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2016년 1차분 사업 계약의뢰	2016. 9. 30	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2016년 1차분 사업 착공	2016. 10. 31	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2016년 1차분 사업 준공	2017. 1. 18	실무관 김준희, 책임관 김용근, 과 장 문동배
2017년 2차분 사업 계약의뢰	2017. 3. 7	실무관 김준희, 책임관 김동윤, 과 장 문명식
2017년 2차분 사업 착공	2017. 6. 23	실무관 안치현, 책임관 권승현, 과 장 문명식