30. 목포시의료원 감염병 격리병동 확충

	【 취지 및 목표 】
❖ 코로나19 외 신종 감염병의 주기적 발생 대비 및 대규모 환자 수용을 위하여 보건복지부 지역거점병원 목포시의료원에 격리병동을 확충하여 체계적인 감염병 대응 및 양질의 의료서비스 제공

사업기간	임기내 완료 ☑ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ☑ 비예산사업 □	사업비	국비 ☑ 도비 ☑ 시비 ☑ 민자 ☑
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ☑	추진주체	국 가 ☑ 지 자 체 ☑	총사업비	9,800백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(연차사업)

□ 위    치 : 목포시의료원 본관(정문) 좌측면(별동 증축)

□ 규    모 : 지상 3층, 연면적 2,168㎡

□ 사업내용 : 긴급치료병상(격리병동), 건강증진센터, 비뇨의학센터 등

□ 사 업 비 : 98억원(국비 2930%, 도비 4.24%, 시비 24.826%, 자부담 4040%)

□ 추진계획

□‘21~‘22년 기능특성화 지원 사업계획서 제출 및 선정 :‘21. 5.~

- 보건복지부 호흡기 및 긴급치료병상 58억원 지원 확정         : ’22. 3.

- 목포시의료원 기능보강사업 마스터플랜 연구용역 실시         : ‘22. 5.

- 마스터플랜 반영된 최종 사업승인 및 사업비 확정(58→98억원) : ’22. 6.

□ 전라남도 지방재정 투자심사 심의                  :‘22. 8.~10.

□ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계 공모       :‘22. 9.~12.

□‘22년 사업비 추경예산 확보 및 사업비 교부(18.2억원) :‘22. 10.

- 국비 14억, 도비 4.2억(도비 지원 확정: ‘22.8.1.)

□ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계            :‘23. 1.~3.

□‘23년 사업비 본예산 확보 및 사업비 교부(시비 9.8억원) :‘23. 2.

□ 기본설계 심의 및 계약심사 등 행정절차 이행        :‘23. 3.~4.

□ 긴급치료병상 증축공사 착공 및 준공, 사업완료 보고  :‘23. 5.~12.

□ 연차별 추진 목표(계획)

연도별	추진 사항		달성도(%)
2022	연도별 목표	긴급치료병상 설계 완료	30%
	추진계획	설계공모, 설계용역 완료
2023	연도별 목표	긴급치료병상 준공	100%
	추진계획	시공사 선정, 착공 및 준공

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황						2026년 이후
			소계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
계		9,800	9,800	200	4,620	4,980	0	0	0
호흡기 및 긴급치료병상 증축공사	국비	2,900	2,900	100	2,800	0	0	0	0
	도비	420	420	0	420	0	0	0	0
	시비	2,480	2,480	100	1,400	980	0	0	0
	자비	4,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	박호빈 (2022.6.10 ~ 6.30.)	최인옥 (2022.6.10 ~ 6.30.)	이명희 (2022.6.10 ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	박호빈 (2022.7.5 ~ 7.29.)	최인옥 (2022.7.5 ~ 7.29.)	유선경 (2022.7.5 ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	박호빈 (2022.8.1 ~ 9.16)	최인옥 (2022.8.1 ~ 9.16)	유선경 (2022.8.1 ~ 9.16)

담당부서		보건위생과장 박호빈 건강증진팀장 최인옥 주무관 유선경