92. 어린이 생태체험관 확대 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 자연친화 및 생태를 고려한 체험공간 확대조성을 통해 관광시너지 효과 극대화 ❖ 지역주민과 함께 상생하는 공간으로 자연생태 가치공유 확산 및 어린이들의 미래핵심 역량 함양

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	26,110백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2021. ~ 2025.

□ 위    치 : 목포시 용해동 11-11번지 일원(자연사박물관 인근)

□ 사 업 량 : 어린이 생태체험시설 추가조성(2개소)

□ 사 업 비 : 총 26,110백만원(특교세 500, 도비 20,610, 시비 5,000)

- 용해 생태체험시설 조성 : 7,000백만원 (특교세 500, 도비 1,500, 시비 5,000)

- 유아숲놀이체험원 : 19,110백만원 (도비 19,110)

□ 사업내용

- 용해 생태체험시설 조성 설립예정 : ‘22. 1. ~ ‘23. 11.

·규    모 : 건물면적 1,594㎡, 지하1/지상2층

·주요시설 : 실내복합 체험놀이시설 (클라임, 챌린지 코스 등)

·발주기관 : 목포시 관광과

- 유아숲놀이체험원 설립예정 : ‘21. 12. ~ ‘25. 6.

·규    모 : 건물면적 7,063㎡, 지상3층

·주요시설 : 유아체험실, 옥상놀이터 /자연체험학습연결통로

·발주기관 : 전라남도교육청

□ 추진계획

□ 용해 생태체험시설 조성사업착공             : 2022. 11.

□ 용해 생태체험시설 조성사업 준공            : 2023. 11.

□ 유아숲놀이체험원 사업착공                  : 2023. 11.

□ 유아숲놀이체험원 사업준공                  : 2025.  6.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	공사추진 : 용해 생태체험시설 조성사업 착공	10
2023	공사추진 : 용해 생태체험시설 조성사업 준공 유아숲놀이체험원 사업착공	30
2024	공사추진 : 유아숲놀이체험원 사업추진	60
2025	공사추진 : 유아숲놀이체험원 사업준공	100

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		26,110	26,110	5,840	2,110	13,230	4,930
용해 생태체험시설 조성	국비
	도비	1,500	1,500	1,300	200
	시비	5,000	5,000	3,800	1,200
	기타	500	500	500
유아숲놀이 체험원	도비	19,110	19,110	240	710	13,230	4,930

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	정지숙 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)	김만재 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)	김승만 (2022. 6. 10. ~ 6. 30.)
실천계획(1차) 보고	박태윤 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)	김만재 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)	김덕철 (2022. 7. 5. ~ 7. 29.)
실천계획(2차) 보고	박태윤 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)	김만재 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)	김승만 (2022. 8. 1. ~ 9. 16.)

담당부서		관광과장 박태윤 관광사업팀장 김만재 주무관 김승만